PaSL Provincia di Pistoia	Scheda di monitoraggio progetti
	______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
	# Cod. Progetto	# Titolo	# Soggetto attuatore
	6090148	Parcheggio scambiatore Pistoia	Comune di Pistoia
Cod. locale	Cod. Sviluppo Toscana	Asse/Filone	# PIR	# Fascia di Priorità
	3.2.1.11	1.7	Seconda fascia priorità
	Articolazione Progetto	Cod. Progetto Quadro	# data approvazione p/e	# data fine p/e	# Stato progetto
Sottoprogetto	6090024	28/12/2007	30/04/2012	Attivo
Referente
	cognome	nome	telefono	e-mail
	Pasquali	Paolo	0573/371552	p.pasquali@comune.pistoia.it
	# Descrizione progetto	Realizzazione parcheggio di interscambio treno-gomma e collegamento con il servizio di TPL in corrispondenza della fermata ferroviaria di Pistoia ovest.
Progetto definitivo approvato con delibera Giunta comunale n. 234 del 28/12/2007. Il progetto è ancora attivo e, rispetto al monitoraggio del 31,12,08, in data 30 gennaio 09, con delibera n. 19 del Consiglio comunale di Pistoia ha autorizzato l'acquisizione dalla provincia di Pistoia dell'area destinata alla realizzazione del parcheggio scambiatore in zona PT ovest.
In data 16 aprile 2009, con delibera n. 117, anche il Consiglio Provinciale di Pistoia ha autorizzato la cessione al Comune di PT dell'area in questione.
In data 7/5/2009 con D.D. n. 1148 è stato dato incarico professionale per redazione tipo di frazionamento, propedeutico alla firma del contratto per l'acquisto dell'area della Provincia.
In data. 13/08/20I0 è stata inviata bozza di contratto al Dirigente Prov.le Ing. Morelli Morelli per ottenerne l’approvazione prima della firma del contratto per l’acquisto dell’area dalla Provincia.
In data 05/09/2010 il Dirigente Morelli, in via informale, ha comunicato al Funzionario ing. Paolo Pasquali che l’iter di alienazione del terreno era in attesa del Nulla Osta della Soprintendenza
Con D.D. n. 3147 del 27/12/2010 è stato approvato lo schema di contratto di acquisizione dell’area, che è poi stato sottoscritto in data 28/12/2010.

	# Localizzazione
	Pistoia, tra viale Adua e la fermata ferroviaria di Pistoia OVEST
	2. Iter  Approvazione
	Numero  	Descrizione della fase	Peso % 	 Inizio Previsto	 Fine Prevista	 Inizio Effettivo	 Fine Effettiva	% 	Data Monitoraggio
	fase	fase	realizzazione	 
	1	Progetto preliminare	29/06/2006	100%	31/12/2010
	2	Progettazione definitiva	30/12/2006	100%	31/12/2010
	3	Variazione progetto definitivo	28/12/2007	100%	31/12/2010
	Pagina 1 di  4

3. Programmazione Finanziaria	finanziamento Certo	finanziamento Presunto
	# Regione Toscana	€ 450.000,00	€ 0,00
	Unione europea	€ 0,00	€ 0,00
	Stato	€ 0,00	€ 0,00
	Province	€ 0,00	€ 0,00
	Comunità montane	€ 0,00	€ 0,00
	Comuni	€ 450.000,00	€ 0,00
	Enti e aziende regionali	€ 0,00	€ 0,00
	 Altro pubblico	€ 0,00	€ 0,00
	Aziende speciali	€ 0,00	€ 0,00
	Privati	€ 0,00	€ 0,00
	Finanziatori non specificati	€ 0,00	€ 0,00
	finanziamento Complessivo	€ 900.000,00	#   finanziamento Certo 	€ 900.000,00	#   finanziamento Presunto   	€ 0,00
	  
	Pagina 2 di  4

	# Strumento regionale di finanziamento
	Docup Ob. 2  2000-2006
	POR Creo FESR  2007-2013	€ 450.000,00
	POR Ob. 3  2000-2006
	POR Creo FSE 2007-2013
	Programma  straordinario investimenti
	Interreg.  IIIA  2000-2006
	Interreg.  IIIB  2000-2006
	Interreg.  IIIC  2000-2006
	Cooperazione territoriale europea  2007-2013
	FAS - APQ
	Piano sviluppo rurale  2000-2006  - FEOGA
	Piano sviluppo rurale  2007-2013 - FEASR
	Altro
	4. Monitoraggio Finanziario - Spesa Complessiva
	# Data monitoraggio	Risorse impegnate	# Risorse pagate
	31/12/2010	€ 0,00	€ 0,00
	5. Monitoraggio Procedurale
	# Numero fase	# Descrizione della fase	Peso % 	 Inizio Previsto	 Fine Prevista	 Inizio Effettivo	 Fine Effettiva	% realizzazione	# Data 
	fase	Monitoraggio 
	1	Realizzazione lavori		30/06/2011	30/04/2012	0,00	31/12/2010
	 
	6. Monitoraggio Fisico
	Descrizione indicatore	Valore atteso	Data riferimento	Valore 	Data monitoraggio
	Pagina 3 di  4

#  Stato attuazione	In corso la procedura di scelta dell’appaltatore.
	Il progettista è il tecnico del Comune di Pistoia Ing. Paolo Pasquali.
#  Note	Il costo complessivo è di € 900.000,00, di cui € 450.000,00 a carico mdel Comune di Pistoia (acquisto area) ed € 450.000,00 già finanziati dalla Regione Toscana con attribuzione dei fondi effettuata con decreto 
	dirigenziale n. 2474 del 28/05/2008.